Příloha č. 1 k vyhl. č. 162/1970 Sb. 

  Směrný obsah souhrnného projektového řešení pro komplexní bytovou výstavbu

 Členění:

  A. Průvodní zpráva

  B. Souhrnné řešení stavby

  C. Stavební část

  D. Technologická část - pouze pro stavby zahrnující provozní zařízení

  E. Rozpočet

  F. Plán organizace výstavby

	 Při zachování tohoto členění musí být souhrnné projektové řešení omezeno na nezbytně potřebný rozsah odpovídající druhu, významu, rozsahu a složitosti stavby.

	 Jednotlivé části obsahují:

 Část A. Průvodní zpráva

  - Název stavby, místo, okres (kraj), názvy a adresy investora a generálního projektanta
  - Přehled uspořádání souhrnného projektového řešení
  - Členění stavby na objekty a popř. provozní soubory
  - Dodavatelský systém s uvedením vyšších a popřípadě dalších rozhodujících dodavatelů.

 Část B. Souhrnné řešení stavby

1. Ekonomické zdůvodnění se zpracovává jako samostatný a oddělitelný díl části B.; obsahuje

 1.1 základní charakteristiku stavby (název a místo stavby, účel a kapacitu zařízení, rozpočtový náklad, základní charakteristiku urbanistického řešení, specifikací hlavních objektů stavby apod.);

 1.2 zdůvodnění zvolené varianty; obsahuje například zdůvodnění

	 - rozsahu zemních prací, vlivů stavby na okolí, záboru zemědělské půdy, rozsahu podmiňujících investic apod.;
	 - navržené koncepce stavby, jejího technického řešení a její vazby na vnější komunikace;
	- navrženého řešení zásobování energiemi a vodou a odkanalizování;
	 - navrženého zastavovacího plánu;
	 - navrženého řešení objektů, použitých typových podkladů, navrženého vnějšího a vnitřního vybavení apod.;

 1.3 přehled a rozbor údajů a technicko-hospodářských ukazatelů; prokazuje ekonomickou efektivnost stavby se zdůvodněním přídavných odchylek od ukazatelů projektového úkolu.

2. Souhrnná technická zpráva objasňuje celkové řešení stavby a obsahuje zejména

2. 1 - zásady celkového urbanistického a technického řešení stavby; 
- stručné odůvodnění a popis staveniště s odkazem na provedený výběr staveniště, zhodnocení a výsledky provedených průzkumných prací, u rekonstrukcí stávajících staveb nebo památkových objektů zhodnocení stavu objektů z hlediska stavebně technického, příp. stavebně historického; 
- popis způsobu napojení stavby na dopravní systém, zásady řešení dopravy na územní stavby a bilancí ploch potřebných pro dopravní zařízení, případně zvláštních dopravních zařízení; 
- hlavní zásady hrubé výškové úpravy staveniště a hrubou bilanci zemních prací, včetně údajů o skrývce ornice a místě jejího uskladnění; 
- popis úprav území stavby, rekultivace a sadových úprav, včetně zařízení hřišť všeho druhu, osvětlení vnějších ploch apod.; 
- údaje o podmiňujících investicích a způsob jejich zajištění; 
- vyhodnocení stavby z hlediska hluku silniční, železniční a letecké dopravy; 
- vliv provozu budované stavby na okolí, popis ochranných pásem všeho druhu, včetně opatření pro jejich správnou funkci a využití; 
- údaje o způsobu zajištění požární ochrany podle příslušných předpisů; 
- zdůvodnění odchylek řešení oproti zásadám, stanoveným ve výchozích podkladech; 
- popis řešení přídavných zvláštních zařízení CO a PO;

2. 2 - popis způsobu napojení stavby na všechny druhy inženýrských, energetických a spojových sítí s uvedením bilancí potřeby ve vztahu k výsledkům průzkumu a ke stávajícím zařízením a se zásadami řešení.

 3. Výkresy

 3.11 Zastavovací plán (situace) celé stavby vypracovaný zpravidla
	 v měřítku 1 : 1000 - 1 : 500
	 - světové strany, směr a síla převládajících větrů;
	 - vyznačení průzkumů staveniště (sondy, podzemní voda, inundační, poddolované a sesuvné území), pokud toto není uvedeno ve zvláštních výkresech;
	 - dosavadní stav polohově a výškově, s označením pevných bodů a vyznačením pozemních a inženýrských objektů (komunikace, rozvody vody, plynu, kanalizace, elektrické vedení silnoproudé a slaboproudé, topné kanály apod.) a označení chráněných objektů stavebních i přírodních;
	 - navrhované zastavění a napojení pozemních a inženýrských objektů se situačním určením všech křižovatek sítí a podchodů pod komunikacemi a úprav staveniště včetně demolic;
	 - všechny rozměry určující velikost navrhovaného zastavění a jeho polohu na pozemku (ve vztahu k polohovým a výškovým bodům, osám tras komunikací apod.);
	 - situační vyznačení pěších a parkových komunikací, hřišť, drobné architektury a zeleně;
	 - vyznačení výškových kót prvních podlaží nad terénem a kót upraveného terénu u vstupů a rohů objektů;
	 - označení ochranných pásem hygienických a bezpečnostních vzdáleností;
	 - označení hlukových pásem (silniční, železniční a letecké dopravy), včetně vyznačení náletových kuželů;
	 - názvy přilehlých stávajících porostů (ulic, náměstí apod.), případně čísla parcel a bloků;
	 - legenda jednotlivých objektů (typ);
	 - vyznačení plochy pozemků zastavěných a nezastavěných v m2 a v %;
	 - situační vyznačení objektů CO a PO.

 3.12 Koordinační plán s vyznačením všech sítí a s řešením způsobu jejich křížení, příp. s vyznačením zvláštních opatření, vyvolaných křížením.

 3.13 U staveb, které ovlivňují pohledové a prostorové vytváření krajiny,  města, se vypracují perspektivní nebo panoramatické pohledy (event. fotografie modelů), objasňující architektonické řešení.

 3.14 V případě se vypracují základní schémata (zásobování vodou, kanalizace,  zásobování elektřinou, rozvodu páry nebo horké vody apod.), která lze účelně slučovat, popřípadě zakreslovat do zastavovacího plánu nebo nahrazovat tabulkami.

4. Doklady Přikládá se zejména výpis z protokolu o schválení projektového úkolu, územní rozhodnutí o umístění stavby a doklady o projednání souhrnného projektového řešení s příslušnými orgány a organizacemi a dodavatelem stavby.

 Část C. Stavební část

 1. Pozemní objekty

1. 1 Architektonicko- stavební řešení

1. 11 Technická zpráva 
- zásady funkčního, technického, architektonického a výtvarného řešení; uvádějí se zejména výsledky průzkumných prací, způsob založení objektů, popis nosných konstrukcí, požadavky na vnější a vnitřní vybavení; případné odchylky od schválených typových podkladů a doklad o jejich povolení; 
- charakteristika objektů z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navrhovaná opatření; 
- stručný popis osvětlení, větrání a klimatizace s uvedením hlavních údajů; 
- u kovových konstrukcí popis statistického systému, zvláštní požadavky na ochranu proti korozi apod.; 
- u rekonstrukcí památkových objektů obsahuje též řešení z hlediska památkové ochrany a z hledisek umělecko-historických.

1. 12 Výkresy (zpravidla 1 : 200) 
- půdorysy vyjadřují stavebně architektonickou dispozici ve vazbě na modulovanou síť, obsahují zejména rozhodující rozměry hlavních konstrukcí včetně základů podle předběžného statistického výpočtu, výškové kóty podlaží, podest apod., označení místností podle účelu (v legendě) a jejich plošné výměry, podlahy a obklady s charakteristickým popisem, druh izolací proti zemní vlhkosti, tlakové agresivní vodě, obrysově hlavní vnitřní zařízení, pokud ovlivňuje dispozici; 
- řezy; vyznačují se schematicky nosné konstrukce včetně základů, výškové kóty jednotlivých podlaží, říms, hřebenů, vstupů a okolního terénu rostlého i upraveného, vztažné k úrovni prvního podlaží, pro které se udá i nadmořská výška; 
- pohledy s udáním jakosti a druhu omítky a barvy; povrch rostlého a upraveného terénu objektu; kóty jednotlivých podlaží, říms, hřebenů, vstupů, rostlého a upraveného terénu; 
- u kovových a jiných konstrukcí přehledné výkresy; 
- doplňkové výkresy; zpracovávají se podle potřeby jako perspektiva, axonometrie, panoramatický pohled, interiéry s určením barev nátěrů a maleb, zvláštní studie, např. akustiky, osvětlení, tepelného sálání apod.

 Dokumentace strojů a zařízení, které jsou součástí stavební části, zpracovává se obdobně jako v části D.

 1. 2 Zdravotně technická instalace a požární vodovod

 1.21 Technická zpráva
	 Udává spotřebu vody, plynu, množství splašků a provozní podmínky (tlak, rychlost, ruční i špičková spotřeba) a zdůvodňuje připojení na venkovní  sítě.

1. 22 Výkresy 
- do půdorysu (obvykle suterénu) se zakreslí schématicky ležaté rozvody i se strojním zařízením; stavební úpravy jako rýhy, srážky a prostupy se nekreslí; 
- do půdorysu stavebních výkresů se schématicky zakreslí umyvadla, klozety, instalační jádra apod.

 1.23 Seznam hlavních zařízení
	 Uvádí se souhrnně za objekt.

 1. 3 Vytápění

 1.31 Technická zpráva
	 Uvede se potřeba tepla s udáním média a parametrů; řeší možnost
	 napojení na zdroj nebo na venkovní rozvod a systém regulačního 
	 zařízení; zdůvodňuje volbu systému.

 1.32 Výkresy
	Do  půdorysu (obvykle suterén) se zakreslí schématicky horizontální rozvod; do půdorysu podlaží se schématicky zakreslí topná tělesa.
	 V případě, že objekt obsahuje kotelnu nebo výměníkovou stanici, zpracuje se schéma a dispoziční řešení tohoto zařízení obdobně jako v části D - 1. 12.

 1.33 Seznam hlavních zařízení se uvede souhrnně za objekt; pro zabudovaný zdroj zpracovává se obdobně jako v části D - 1. 13.

 1. 4 Hromosvody

 1.41 Technická zpráva
	 Obsahuje stručný popis uvedením místních uzemňovacích podmínek.

 1.42 Výkresy
Zpracovávají se schématicky, a to jen u složitých ochranných zařízení (kdy se např. použije Faradayových klecí, ochranných sítí na stožárech  apod.); uzemňovací desky se vyznačují jen značkami v půdorysech.

 1. 43 Seznam zařízení se zpracovává jen u složitých ochranných zařízení.

 1. 5 Vzduchotechnická zařízení

 1.51 Technická zpráva
Uvede se popis provozu a základní údaje a charakteristika zařízení se stručným zdůvodněním volených výkonů, výchozí parametry pro výpočet zařízení, regulační systém a důležité údaje o nutných stavebních opatřeních, bilance spotřeb energie a látek a charakteristika  z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 1.52 Výkresy
	 Dispozice zařízení, prostorové umístění strojů, konstrukcí, panelů, rozvaděčů, kanálů a potrubí s uvedením profilů a s kótami hlavních rozměrů ve vztahu ke stavební konstrukci a ostatním zařízením.

 1.53 Seznam strojů a zařízení se základními parametry a charakteristikou  a hrubou váhou
	 - izolace se uvedou souhrnně s odhadem výměr.

 1. 6 Světelné a silnoproudé rozvody vnitřní

 1.61 Technická zpráva
	 Obsahuje údaje o volbě proudových soustav a napětí, o celkové spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách, případné požadavky na řízení, blokování, ovládání apod., druh osvětlení s údaji požadované intenzity, využitelnost stávajících zdrojů nebo popis zdroje napájení, druh prostředí, stupeň důležitosti dodávky, druh zemnění s údaji o místních uzemňovacích podmínkách a charakteristiku z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.

 1.62 Výkresy
 Schéma rozvodu včetně rozvaděčů, dispozice se zakreslenými sdruženými trasami rozvodů a umístění rozvaděčů, s vyznačením druhů a informativních rozměrů tras, rozmístění a druhu svítidel.

 1.63 Seznam zařízení obsahující jednotlivé položky investičních dodávek (rozvaděče, skříňky, transformátory apod.) s uvedením počtu jednotek a základních technických údajů.

 1. 7 Sdělovací a slaboproudé rozvody vnitřní

 1.71 Technická zpráva
 Obsahuje popis a zdůvodnění koncepce řešení s vazbou na veřejná  zařízení (napojení na veřejnou telefonní síť, příp. síť rozsahu po drátě, nebo jiná zařízení, např. rozvod televizního signálu), návrh na umístění soustřeďovacího bodu místního rozvodu v bytovém objektu, jeho plochu a stručný popis rozvodů. Ve složitých případech se připojí grafické vyjádření, např. pomocí přehledových schémat, tabulek apod.

 1.72 Výkresy
Schéma rozvodů s připojením k soustřeďovacím bodům, dispozice se zakreslenými rozvody s vyznačením jejich typů, rozmístění vývodů, příp. přístrojů.

 1.73 Seznam zařízení doplněný o tabulku udávající počet a druh sdělovacích a slaboproudých přístrojů v jednotlivých místnostech a prostorách s odkazem na způsob jejich napájení.

2. Inženýrské objekty (komunikace, úprava terénu a zpevnění ploch, objekty pro zásobování vodou, energií, apod., např. vodovody, kanalizace, rozvody silnoproudé a slaboproudé, parovody, plynovody apod.).

 2.1 Stavebně technické řešení (kromě světelných, silnoproudých a vnějších sdělovacích rozvodů)

2. 11 Technická zpráva 
- popis objektů (rozvodů) a pomocných zařízení; 
- vyhodnocení výsledků průzkumových prací a případně výzkumných prací; 
- popis funkčního a technického řešení; uvede se zejména způsob založení objektu, popis užitých konstrukcí a zařízení na základě výpočtů apod., případně další údaje objasňující řešení; požadavky na vybavení; 
- úprava dotčeného režimu povrchových a podzemních vod; 
- zvláštní požadavky na postup prací; 
- zvláštní požadavky na provoz zařízení, údaje o množství dopravovaných materiálů, látek nebo energie, jejich vlastnostech, dopravě, skladování, rozvodu, čištění apod.; 
- charakteristika objektu z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navrhovaná opatření; 
- seznam typizovaných objektů a jejich částí.

2. 12 Výkresy 
- situační výkres navrhovaného objektu nebo jeho zakreslení do zastavovacího plánu s označením výšek a navázáním na souřadnicovou síť;
- seznam a vyznačení pevných směrových i výškových bodů; 
- podélné profily v přiměřeném měřítku; podélné profily se nemusí dokládat u elektrorozvodů a podružných tras vodovodů a plynovodů; 
- vzorové příčné řezy; 
- charakteristické příčné řezy zpravidla v měřítku 1 : 100 vystihující hrubý rozsah zemních prací a technických úprav (u podzemních rozvodů se nekreslí); 
- půdorysy, řezy a pohledy atypických objektů objasňující funkční, technické a výtvarné řešení objektů; 
- povšechné výkresy provizorních přemostění, komunikací, vodotečí, přeložek, dálkových vedení, dále objektů určených k demolici nebo adaptaci včetně provizorních zařízení dotčených navrhovaným objektem; 
- způsob zakládání objektů se situací a charakteristické řezy; návrh konstrukce jímky; 
- povšechný výpočet kubatury zemních prací (případně se schématem pohybu zemin).

 2. 2 Světelné a silnoproudé rozvody vnější

 2. 21 Technická zpráva
	 - údaje, kde začíná a končí rozvod;
	 - volba proudových soustav a napětí;
	 - údaje instalovaných výkonů napájených míst;
	 - druh prostředí;
	 - kategorie dodávky elektřiny podle ČSN;
	 - druh uzemnění s údaji místních uzemňovacích podmínek;
	 - zrakové poměry s údaji výsledků výpočtů a s uvedením výchozích parametrů ; ochrany proti zkratu;
	 - úbytky na napětí, ztráty na výkon s údaji výsledků výpočtů s uvedením výchozích parametrů.

 2. 22 Výkresy
	 - jednopólové schéma hlavního rozvodu včetně zdrojů a údajů o přenosu energie;
	 - situace vnějších rozvodů zakjreslená obvykle v zastavovacím plánu s jednočarovým vyjádřením průběhu tras, případně kabelových kanálů a využitých podchodů (přechodů) včetně nároků na vstupy do objektů; vyznačení druhu a rozmístění svítidel venkovního osvětlení.

 2.23 Seznam zařízení obsahuje jednotlivé položky investičních dodávek s uvedením počtu jednotek a základních technických jednotek.

 2. 3 Vnější sdělovací rozvody

 2. 31 Technická zpráva
	 - popis a zdůvodnění celkové koncepce řešení s vazbou na veřejná nebo jiná zařízení; ve složitých případech může být technická zpráva doplněna grafickým vyjádřením, např. pomocí přehledových schémat, tabulek apod;
	 - stručný popis rozvodů;
	 - hodnota útlumu k nejvzdálenějšímu účastníku;
	 - charakteristika z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 2. 32 Výkresy
	 - společné schéma všech vnějších sdělovacích rozvodů, doplněné údaji o typech a kapacitě kabelů;
	 - situace zakreslená obvykle v zastavovacím plánu; obsahuje trasy jednotlivých rozvodů s vyznačením křižováním s jinými rozvody, podchodů a přechodů přes komunikace, vstupu do objektů (k soustřeďovacím bodům vnitřního rozvodu) a údaji o způsobu uložení kabelů.

 2.33 Seznam zařízení
	 Seznam kabelů s údaji délek.

3. Specifikace dodávek s dlouhou dodací lhůtou Specifikace dodávek a prací, které je nutno vzhledem k jejich dlouhým dodacím lhůtám a plánované lhůtě výstavby zajistit předem. Specifikací odevzdá generální projektant investorovi v dohodnutém rozsahu a termínu.

 Poznámka:

	 Pokud se v pozemních a inženýrských objektech navrhují stroje a zařízení vyvolávající hluk a otřesy, obsahuje příslušná technická zpráva vždy též způsob řešení zabezpečující, aby hodnoty hlučnosti a otřesů byly v souladu s příslušnými předpisy.

 Část D. Technologická část

	 Technologická část souhrnného projektového řešení se zpracovává jen u staveb zahrnujících provozní zařízení (souhrn strojů a zařízení), které má charakter provozního souboru ( § 2 odst. 3 vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb).

	 Technologická část se zpracovává pro provozní soubory, a to podle jejich prostorové souvislosti. Provozní soubory umístěné v bezprostřední návaznosti na jiné provozní soubory se řeší společně jedním schématem a dispozicí s jednoznačný vymezením rozsahu jednotlivých provozních souborů.

	 Každá technická zpráva obsahuje charakteristiky provozního souboru z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; ve smyslu poznámky k poznámky k části C obsahuje také řešení zabezpečující, aby hodnoty hlučnosti a otřesů byly v souladu s příslušnými předpisy; obsahuje rovněž zvláštní požadavky na údržbu z hlediska technologického a provozního.

	 U provozních souborů budovaných pro výrobu některé z energií je výroba této energie považována za technologii a příslušná část projektu se zpracuje jako pro výrobní zařízení.

	 U jiných provozních souborů nebo jejich částí jako jsou transformovny a spínací stanice, vzduchotechnická zařízení apod., zpracuje se příslušná část projektu přiměřeně jako pro provozní soubory výrobních zařízení.

1. 1 Výrobní (provozní) zařízení

1. 11 Technická zpráva 
- charakteristika provozního souboru, množství roční výroby, fond pracovní doby, projektová kapacita zařízení; - popis technologie výroby; 
- potřeba hlavních a pomocných surovin, jejich zdroje a způsob zásobování, množství odpadních látek a jejich zneškodnění; 
- rozpis energií a vody; uvede se druh a množství energií a vod, jejich zdroje a způsob zásobování, hlavní spotřebiče, instalované výkony, výpočtová a špičková zatížení odběru elektřiny, kategorizace spotřeby, stanovená podle platné ČSN; 
- přehled zaměstnanců; 
- požadavky na dopravu do a z provozního souboru; 
- sklady a mezisklady surovin, provozních hmot, polovýrobků, výrobků a odpadů.

1. 12 Výkresy 
- technologické schéma; vyjadřuje technologický postup; 
- dispoziční schéma; vyznačuje vzájemné propojení všech strojů, zařízení a měřicí a regulační obvody; tam kde je to účelné, lze obě schémata nahradit jediným schématem; 
- dispozice strojů a zařízení (půdorysy a potřebné řezy zpravidla v měřítku 1 : 200); vyjadřuje návrh prostorového rozmístění hlavních strojů a zařízení uvedených ve schématu, a to v podrobnosti potřebné k určení celkové plochy a prostorů, ve vztahu ke stavební konstrukci, k zásadnímu určení vazeb na vnější rozvody a inženýrské sítě.

 1.13 Seznam strojů a zařízení
	 Obsahuje hlavní stroje a zařízení v tomto uspořádání:
	 - stroje a zařízení se uvedou v členění na provozní jednotky, popř. základní jednotky; u každé položky se uvedou technické údaje; pro nestandartní stroje se v případě potřeby uvedou výchozí technické údaje; pokud je v seznamu uveden provozně nevyzkoušený stroj, musí být jako takový označen;
	 - kovové konstrukce, které jsou součástí technologického zařízení; uvede se název a váha;
	 - potrubí včetně příslušenství a armatury; uvedou se souhrnně podle druhu materiálu, celkovou váhou v tunách stanovenou odborným odhadem;
	 - izolace se uvedou souhrnně v členění podle druhu materiálů izolací s odhadem výměr;
	 - nátěry se uvedou souhrnně s odhadem výměr.

 Poznámka:

	 (Platí pro zpracování všech seznamů strojů a zařízení)
a) pro nestandartní stroje a zařízení a kovové konstrukce mohou být výchozí technické údaje uvedeny ve zvláštních výkresech nebo popisech, které tvoří přílohu k seznamu strojů a zařízení;
b) odděleně se uvádí 
- inventář hrazený z investičních prostředků, 
- stroje a zařízení z tuzemska zajišťované investorem přímo, 
- stroje a zařízení z dovozu;
c) seznam strojů a zařízení představuje současně specifikaci k dílčímu rozpočtu provozního souboru.

 1. 2 Měření, regulace a automatizace

 1. 21 Technická zpráva
	 - popis a zdůvodnění koncepce sledování a řízení provozu, souvislosti měřicích, regulačních a ovládacích obvodů s výrobním postupem;
	 - charakteristika provozu a prostředí;
	 - charakteristické údaje měřených a regulovaných médií s údaji o hlavních konstrukčních materiálech;
	- technické údaje a parametry jednotlivých obvodů s popisem funkcí.

 1. 22 Výkresy
	 - kopie dispozice strojů a zařízení uvedená v dílu (1. 12) výrobní zařízení s vyznačením hlavní sběrné trasy;
	 - kopie schématu (dispozičního) uvedeného v dílu (1. 12) výrobní zařízení, popřípadě schémata měřicích a regulačních obvodů a hlavních automatizačních obvodů;
	 - dispozice dozorem, panelů, ovládacích pultů, přístrojových skříní v dozornách i v provozech s udáním hlavních rozměrů.

 1. 23 Seznam strojů a zařízení
	- soupis přístrojů souhrnně po skupinách podle základních typů;
	- soupis měřicích a regulačních obvodů s udáním dálkových přenosů;
	- panely, pulty, skříně a ochranné skříně s hlavními rozměry, jakož i veškeré zařízení investičního charakteru měřicích ústředen a velitelem se uvedou samostatně.

 1. 3 Provozní rozvod silnoproudu

 1. 31 Technická zpráva
	 - údaje, kde začíná a končí rozvod;
	 - volba proudových soustav a napětí a způsob napájení;
	 - údaje o celkové spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách rozčleněných podle napětí;
	- případné zvláštní provozní a předpisové podmínky a jejich řešení;
	 - druh prostředí;
	 - stupeň důležitosti dodávky elektrické energie;
	 - zásadní řešení ochrana proti zkratu, přetížení o doteku, uzemnění apod.;
	 - popis způsobu kompenzace účiníku;
	 - zásady blokování, ovládání, měření a signalizace;
	- zkratové poměry až po přípojnice hlavních (úsekových) rozvaděčů.

 1. 32 Výkresy
	 - přehledové schéma propojení rozvaděčů bez dimenzování ochran; zakreslí se hlavní rozvaděč až po přípojnice podružných rozvaděčů, nebo až k místům připojení samostatně napojovaných zařízení s jejich označením a s vyznačením proudových soustav a udáním zkratových poměrů;
	 - dispozice se zakreslenými sdruženými trasami rozvodů počínaje od hlavního rozvaděče až po podružné rozvaděče s uvedením druhu a rozměrů rozvaděčů a informativních rozměrů sdružených tras;
	 - schémata rozvaděčů (jednopólová) s označením jednotlivých vývodů, použitých přístrojů bez dimenzování pojistek a tepelných ochran a bez udání druhu a průřezů vodičů a vývodů; na přípojnicích se vyznačí proudová soustava; dále se uvede druh rozvaděče a jeho hlavní rozměry.

 1. 33 Seznam strojů a zařízení členěný podle objektů
	 - obsahuje jednotlivé položky investičních dodávek, tj. rozvaděče (druh, proudovou soustavu, jmenovitý proud přípojnic, počet polí pro v. n., zkratkovou odolnost), případné transformátory od 30 kVa;
	 - u montážních prací uvedou se jen souhrnně položky základního montážního materiálu podle odborného odhadu.

 1. 4 Veřejné telefonní ústředny

 1. 41 Technická zpráva
	 - volba typů a druhů zařízení, výpočet hodnot zaručujících provoz navržených zařízení, zdůvodnění odchylek od projektového úkolu;
	 - požadavky na prostředí a na stavebně technické úpravy;
	 - popis nestandartních zařízení, jejich funkce, včetně potřebných parametrů;
	 - popis uspořádání provozu a počet zaměstnanců;
	 - možnosti dalšího rozšíření a řešení nouzového provozu;
	 - řešení uzemnění.

 1. 42 Výkresy
	 - funkční blokové schéma (přehledové);
	 - přehledové schéma sdělovací sítě (pokud to povaha investice vyžaduje); - skupinový plán;
	 - kabelový plán;
	 - dispozice strojů a zařízení, včetně proudových zdrojů ve vhodném měřítku; vyjadřuje rozmístnění strojů a zařízení, délky a typy stojanových řad s kótováním jednotlivých zařízení vzájemně a od stavebních konstrukcí, včetně silových vývodů a osvětlovacích těles; u proudových zdrojů se uvedou údaje o spotřebě a výkonu zařízení;
	 - u nestandartních zařízení schématický náčrt zařízení s návrhem uspořádání výstroje;
	 - situační výkres uzemnění zařízení;
	 - orientační obsazení mezilehlých rozvodů a hlavního rozvodu.

 1.43 Seznam strojů a zařízení obsahuje soupis strojů, zařízení a náhradních dílu s uvedením ceníkových čísel zařízení, počtu kusů a cen; soupis se člení  podle výrobců.

 Poznámka:
a) v rámci provozního souboru veřejné telefonní ústředny se projektuje kabelové spojení mezi hlavním rozvodem a kabelovnou, včetně roštu, a to na konečnou kapacitu ústředny;
b) u pobočkových ústředen se technická zpráva i výkresová část zpracují zjednodušeně přiměřeně funkci, typu a kapacitě ústředny. Spojovací vedení mezi svislou stranou hlavního rozvodu a pobočkovými stanicemi se řeší jako součást vnitřního sdělovacího rozvodu.

 Část E. Rozpočet

	 Souhrnný rozpočet k souhrnnému projektovému řešení a rozpočty jednotlivých objektů, provozních souborů, ostatních dodávek a nákladů.

	 1. Souhrnný rozpočet stavby k souhrnnému projektovému řešení se zpracovává ve skladbě předepsané  § 20 vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, na tiskopisu č. 1 její přílohy. Rekapitulace nákladů podle jednotlivých hlav (tiskopis č. 2) se zpracovává na upraveném formuláři, který je připojen.

	 2. Rozpočtové náklady provozních souborů a objektů (hlava II a III souhrnného rozpočtu) se určují podle míry technické vyjasněnosti projektu ve stadiu souhrnného projektového řešení způsobem, uvedeným v  § 24 vyhlášky č. 107/1966 Sb.

	 3. Náklady na projektové práce (hlava I) se stanoví na podkladě ceníku projektových prací. 1)  Práce geodetické a kartografické, inženýrskogeologické, hydrogeologické a ostatní průzkumné práce se oceňují podle příslušných ceníků.

 1) Ceník projektových prací byl vydán výnosem č. 5/1967 Státní komise pro  techniku pod čj. 39192/III-22/67.

	 4. Stroje, zařízení, nářadí a inventář investičního charakteru (hlava IV), pokud nejsou součástí provozních souborů a objektů, se rozpočtují platnými velkoobchodními cenami. Takto stanovené náklady se doplní o náklady na mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu včetně nákladů na konečné osazení výrobků.

	 5. Rozpočtové náklady uměleckých děl (hlava V) se stanoví buď na základě jejich předběžného ocenění, nebo na základě ukazatelů nákladů obdobných vyprojektovaných a realizovaných staveb s orientačním přihlédnutím ke koeficientům, obsaženým v prováděcích pokynech býv. Státní komise pro techniku k usnesení vlády č. 355/1965.

	 6. Vedlejší rozpočtové náklady (hlava VI) se určují buď stanovenými procentními sazbami k určené základně, nebo rozpočtovými ukazateli, odvozenými z obdobných již vyprojektovaných a realizovaných staveb, popř. podrobnějším způsobem na podkladě individuálních rozborů, vypracovaných podle závazných předpisů a směrnic. Náklady na zařízení staveniště se stanoví výhradně globální metodou podle  § 28 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 107/1966 Sb. a předpisů na ni navazujících a výjimečně individuální metodou ( § 13 odst. 2).

	 7. Ostatní náklady (hlava VII) se stanoví podle obecně platných cenových nebo zvláštních předpisů pro jednotlivé druhy nákladů (do sl. č. 12 a 14 přiloženého tiskopisu náleží z této hlavy jen náklady ze sl. f+g souhrnného rozpočtu. Do sloupce 16 a 18 se však zahrnují úplné náklady hlavy VII). 2)  

 2) Podrobná náplň rozpočtových nákladů hlavy VII a IX je uvedena ve výkladu  býv. Státní komise pro techniku k některým ustanovením (týkajícím se  rozpočtování) vyhlášky č.107/1966 Sb., o dokumentaci staveb. Musí být v  souladu s vyhláškou ministerstva financí a Státní banky československé o  financování reprodukce základních prostředků (č. 102/1966 Sb.). Výklad byl  publikován ve Zpravodaji MSv č. 6/1967 z 24. 3. 1967.

	 8. Rozpočtová rezerva (hlava VIII) se stanoví dohodou investora a generálního projektanta procentní přirážkou k součtu rozpočtových nákladů objektů a provozních souborů. Procentní přirážka se dohodne v rozmezí od 3 % do 7 %. Je-li součástí stavby rekonstrukce nebo adaptace stávajícího objektu, stanoví se u tohoto objektu rezerva v rozmezí od 5 % do 10 %. Při stanovení výše rozpočtové rezervy se postupuje podle  § 34 odst. 2 vyhlášky č. 107/1966 Sb.

	 9. Náklady, nezahrnované do ceny základních prostředků (hlava IX souhrnného rozpočtu), se stanoví podle obecně platných cenových předpisů, platných pro jejich jednotlivé druhy. 3)  Rozpočtové náklady na inženýrskou činnost přímou i dodavatelskou se stanoví podle ceníku inženýrských činností. 4)  

 3) Viz druhá poznámka pod čarou na str. 724.

 4) Ceník inženýrských činností byl vydán výnosem č. 3/1967 býv. Státní komisí  pro techniku pod čj. 47424/III-2/1967. Náklady na předprojektovou přípravu  a inženýrskou činnost se u družstevní byt. výstavby financují z  investičních účtů stavebních byt. družstev u SBČs (opatření ústředí SBČs  čj. 352/7770/67 ze dne 23. 4. /1967/.

 Část F. Plán organizace výstavby

 1. Technická zpráva

  - Charakteristika staveniště a přilehlé oblasti z hlediska organizace výstavby s využitím výsledků průzkumných prací;
  - celková kapacita sociálního a hlavního provozního zařízení staveniště podle podkladů dodavatelů investora; jmenovitě se uvedou
	 a) trvalé objekty projektované stavby, které se vybudují v předstihu tak, aby jich mohli dočasně užívat dodavatelé jako zařízení staveniště,
	 b) stávající objekty a zařízení investora, které investor poskytne za úplatu dodavatelům k dočasnému užívání jako zařízení staveniště,
   c) dočasné objekty zařízení staveniště, které platí investor mimo globál na zařízení staveniště (mimoglobální objekty investora);
  - seznam dočasných objektů zvlášť rozpočtovaných (mimoglobální objekty zařízení staveniště);
  - údaje o způsobu zajištění vody a energií pro provádění stavby s ohledem na potřebu uvedenou dodavateli investora;
  - při výstavbě za provozu stávajících objektů a zařízení údaje o potřebě koordinace postupu stavby s ohledem na jejich provoz;
  - likvidace zařízení staveniště.

 2. Výkresy

 2.1 Kopie zastavovacího plánu stavby se zakreslením objektů zařízení staveniště, jejichž náklady nejsou obsaženy v přirážkách na zařízení staveniště, s vyznačením volných ploch, určených pro zařízení staveniště, obvodu staveniště, včetně dislokovaných stavenišť, všech vstupů a vjezdů a se zakreslením deponií organizace a přebytečného výkopku, případně zemníků zřízených pro účely stavby.

 2.2 Dokumentace objektů zařízení staveniště zvlášť rozpočtových (mimoglobální objekty zařízení staveniště).

 3. Časový plán stavby

 3.1 Graf postupu dalších projektových prací po souhrnném projektovém řešení.

 3.2 Graf postupu provádění stavby od předpokládaného zahájení do odevzdání a převzetí v členění na provozní soubory a objekty včetně objektů zařízení staveniště hrazených investorem v rozvržení do jednotlivých kalendářních let (pro první kalendářní rok v kvartálech) s termíny:
	 - předávání staveniště dodavatelům investora;
	 - zahájení a ukončení výstavby objektů , případně stavební připravenosti pro zahájení montáže provozních souborů;
	- zahájení a skončení montážních prací jednotlivých provozních souborů;
	 - komplexní zkoušek příslušných provozních souborů a pro uvedení stavby, popř. jejích provozně ucelených částí do provozu; časový průběh zkušebního provozu;
	 - uvedení staveniště do původního nebo smluvného stavu (likvidace globálních objektů zařízení staveniště, rekultivace pozemků apod.).

 3.3 Časové rozvržení finančních objemů (celkem a z toho stavební a technologické části stavby).

4. Doklady o projednání plánu organizace výstavby s dodavateli investora.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Archivní číslo . . .                                                                               List č. . . .          I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Rekapitulace k   I. finančnímu propočtu                    Stavba                          Kódové číslo stavby:           I
I                 II. souhrnnému rozpočtu                                                                                   I
I                III. souhrnnému odbytovému rozpočtu                                         Změna čís:                     I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I     I                 I       I          I        I Rozpočtové náklady v členění podle hlav v tis. Kčs.                   I
I     I                 I       I          I        I-----------------------------------------------------------------------I
I     I                 I Zatří-I Měrná -  I        I Nákl. zahrnov do plánu invest výtavby I     I     I     I      I      I
I Pol.I Rekapitulace    I dění  I účelová  I Pláno- I---------------------------------------I-----I     I     I      I      I
I čís.I podle hlav,     IobjektůI jednotka I vaný   I hl.I hl.I hl.I hl. I hl. I hl. I hl.  IhlavyI Hl  INák- I Hl.  IJedno-I
I     I objektů  a      I a     I          Itermín  I II I IIII IV I V   I IV  I VII I VIII I II- I I   Ilady I IX   IrázovéI
I     I provozních      Iprovoz-I          Izahá-   I    I    I    I     I     I     I      I VIIII     I ZP  I      Inák-  I
I     I souborů         I ních  I----------Ijení a  I    I    I    I     I     I     I      Icel -I     I cel-I      Ilady  I
I     I                 Isou -  IdruhIpočetIdokon - I    I    I    I     I     I     I      I kem I     I kem I      IcelkemI
I     I                 Iborů   I    I     Ičení    I    I    I    I     I     I     I      I     I     Ihl. -I      Ihl. I-I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I I-  I      I IX   I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     IVIII I      I      I
I-----I-----------------I-------I----I-----I--------I----I----I----I-----I-----I-----I------I-----I-----I-----I------I------I
I  1  I       2         I  3    I 4  I  5  I   6    I  7 I 8  I  9 I  10 I  11 I  12 I  13  I  14 I  15 I  16 I  17  I  18  I
I-----I-----------------I-------I----I-----I--------I----I----I----I-----I-----I-----I------I-----I-----I-----I------I------I
I     I    Hlavy        I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I  1. I 1- Projektové   I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I  x  I  x  I      I   x  I
I     I    práce        I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I  2. I II-Provozní     I       I    I     I        I x  I    I    I     I     I     I      I  x  I     I  x  I      I   x  I
I     I    soubory      I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I  3. I III- Objekty    I       I    I     I        I    I  x I    I     I     I     I      I  x  I     I  x  I      I   x  I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I  4. I IV- Stroje a    I       I    I     I        I    I    I x  I     I     I     I      I  x  I     I  x  I      I   x  I
I     I     zařízení    I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I  5. I V-Umělecké práceI       I    I     I        I    I    I    I  x  I     I     I      I  x  I     I  x  I      I   x  I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I  6. I VI-Vedlejší     I       I    I     I        I    I    I    I     I  x  I     I      I  x  I     I  x  I      I   x  I
I     I    náklady      I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I  7. I VII-Ostatní     I       I    I     I        I    I    I    I     I     I (x) I      I (x) I     I  x  I      I   x  I
I     I     náklady     I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I  8. I VIII-Rozpočtová I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I  x   I  x  I     I  x  I      I   x  I
I     I      rezerva    I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I  9. I IX-Náklady      I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I   x  I   x  I
I     I nezahrnuté do ZFI       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I 10. I Celkem          I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I  x  I     I  x  I      I   x  I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I Provozní souboryI       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I a ojekty        I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I 11. I Provozní soubor I       I    I     I        I  x I  - I -  I  -  I  x  I  -  I  x   I  x  I  x  I  x  I   x  I   x  I
I     I č. 1            I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I 12. I Provozní soubor I       I    I     I        I  x I  - I  x I  -  I  x  I  x  I  x   I  x  I  x  I  x  I   x  I   x  I
I     I č. 2            I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I  .              I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I  .              I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I 21. I Objekt č. 1     I       I    I     I        I -  I  x I  - I  -  I  x  I  -  I   x  I  x  I  x  I  x  I   x  I   x  I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I 22. I Objekt č. 2     I       I    I     I        I -  I  x I  x I  -  I  x  I   x I   x  I  x  I  x  I  x  I   x  I   x  I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I  .              I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I  .              I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
I     I                 I       I    I     I        I    I    I    I     I     I     I      I     I     I     I      I      I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------